구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 홍대운, 7332)
	1-10
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 6월 기준)		완료예상	2025년 6월
			목표달성여부	여

농산어촌 주거플랫폼 사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2020. 1월 ~ 2025. 12월

❍ 위       치: 산청군 신안면 소재지 내

❍ 총 소요예산: 16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)

❍ 사 업 내 용:

- 어울림문화센터 조성(2,552㎡), 청소년 문화의집 조성(966㎡)

- 보행 및 교통환경 개선 1식, 어울림마당 조성(845㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 시행계획 및 세부설계	: 2022. 8월 ~ 2023. 9월

❍ 공사착공	: 2023. 9월

❍ 어울림문화센터 및 청소년 문화의집 준공	: 2025. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
16,000	16,000	12,579	16,000	11,200	1,440	3,360	-	12,579	8,805	1,132	2,642	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	16,000	3,421	3,007	4,311	5,261	-	-	-
국비	11,200	2,396	2,105	3,018	3,682	-	-	-
도비	1,440	308	270	388	474	-	-	-
군비	3,360	718	632	905	1,105	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
농산어촌 주거 플랫폼 사업	합계	12,579	12,579	3,007	3,007	4,311	4,311	5,261	4,468	-	793
	국비	8,805	8,805	2,105	2,105	3,018	3,018	3,682	2,889	-	793
	도비	1,132	1,132	270	270	388	388	474	474	-	-
	군비	2,642	2,642	632	632	905	905	1,105	1,105	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 활성화 프로그램(S/W) 운영 및 시설물 관리	: 2025. 7월 ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 홍대운, 7332)
	1-10
추진실적 (기준일)	90%(정상추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2025년 3월
			목표달성여부	여

농산어촌 주거플랫폼 사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2020. 1. ~ 2024. 12월

- 변    경: 2020. 1. ~ 2025. 3월

- 변경사유: 설계변경으로 인한 공사 기간 연장

❍ 위       치: 산청군 신안면 소재지 내

❍ 총 소요예산: 16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)

❍ 사 업 내 용

- 어울림문화센터 조성(2,268㎡), 청소년 문화의집 조성(966㎡)

- 보행 및 교통환경 개선 1식, 어울림마당 조성(845㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 시행계획 및 세부설계 착수	: 2023.  2월

❍ 시행계획 및 세부설계 완료	: 2023.  2월

❍ 공사 착공	: 2023.  6월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
16,000	16,000	12,579	16,000	11,200	1,440	3,360	-	12,579	8,805	1,132	2,642	-

□ 연차별 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	16,000	3,421	3,007	4,311	5,261	-	-	-
국비	11,200	2,395	2,105	3,018	3,682	-	-	-
도비	1,440	308	270	388	474	-	-	-
군비	3,360	718	632	905	1,105	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
농산어촌 주거플랫폼 사업	소계	12,579	11,786	3,007	3,007	4,311	4,311	5,261	4,468	-	-
	국비	8,805	8,012	2,105	2,105	3,018	3,018	3,682	2,889	-	-
	도비	1,132	1,132	270	270	388	388	474	474	-	-
	군비	2,642	2,642	632	632	905	905	1,105	1,105	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 정상 추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 공사 준공                                               : 2025. 3월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 권영빈, 7334)
	1-10
추진실적 (기준일)	50%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

농산어촌 주거플랫폼 사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2020. 1. ~ 2024. 12월

❍ 위       치: 산청군 신안면 소재지 내

❍ 총 소요예산: 16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)

❍ 사 업 내 용

- 어울림문화센터 조성(2,268㎡), 청소년 문화의집 조성(966㎡)

- 보행 및 교통환경 개선 1식, 어울림마당 조성(845㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 시행계획 및 세부설계 착수                               : 2023.  2월

❍ 시행계획 및 세부설계 완료                               : 2023.  2월

❍ 공사 착공                                               : 2023.  6월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
16,000	16,000	12,579	16,000	11,200	1,440	3,360	-	12,579	8,805	1,132	2,642	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	16,000	3,421	3,007	4,312	5,260	-	-	-
국비	11,200	2,395	2,105	3,018	3,682	-	-	-
도비	1,440	308	270	388	474	-	-	-
군비	3,360	718	632	906	1,104	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
농산어촌 주거플랫폼 사업	소계	12,579	7,318	3,007	3,007	4,311	4,311	5,261	-
	국비	8,805	5,123	2,105	2,105	3,018	3,018	3,682	-
	도비	1,132	658	270	270	388	388	474	-
	군비	2,642	1,537	632	632	905	905	1,105	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 공사 준공                                               : 2024.  12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 권영빈, 7334)
	1-10
추진실적	50% (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

농산어촌 주거플랫폼 사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2020. 1. ~ 2024. 12월

❍ 위       치: 산청군 신안면 소재지 내

❍ 총 소요예산: 16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)

❍ 사 업 내 용

- 어울림문화센터 조성(2,268㎡), 청소년 문화의집 조성(966㎡)

- 보행 및 교통환경 개선 1식, 어울림마당 조성(845㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 시행계획 및 세부설계 착수                               : 2022.  7월

❍ 시행계획 및 세부설계 완료                               : 2023.  9월

❍ 공사 착공                                               : 2023. 10월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
16,000	16,000	12,579	16,000	11,200	1,440	3,360	-	12,579	8,805	1,132	2,642	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	16,000	3,421	3,007	4,312	5,260	-	-	-
국비	11,200	2,395	2,105	3,018	3,682	-	-	-
도비	1,440	308	270	388	474	-	-	-
군비	3,360	718	632	906	1,104	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
농산어촌 주거플랫폼 사업	소계	12,579	7,318	3,007	3,007	4,311	4,311	5,261	-
	국비	8,805	5,123	2,105	2,105	3,018	3,018	3,682	-
	도비	1,132	658	270	270	388	388	474	-
	군비	2,642	1,537	632	632	905	905	1,105	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 공사 준공                                               : 2024.  12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 김영옥)
	1-10
추진실적	20% (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

농산촌 주거플랫폼 사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12월

❍ 위    치 : 산청군 신안면 소재지 일원

❍ 소요예산 : 16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)

❍ 사업내용 : 어울림문화센터 조성, 문화의 집 리모델링, 어울림마당 조성 등

□ 추진사항

❍ 공모사업 선정                                           : 2019. 12월

❍ 기본계획 수립 착수                                      : 2020.  5월

❍ 기본계획 수립 완료                                      : 2022.  2월

❍ 시행계획(세부설계) 수립 착수                             : 2022.  7월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	16,000	6,428	4,312	5,260
국비	11,200	4,500	3,018	3,682
도비	1,440	578	388	474
군비	3,360	1,350	906	1,104
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 시행계획(세부설계) 수립 완료                             : 2023.  2월

❍ 공사 착공                                               : 2023.  6월

❍ 공사 준공                                               : 2024. 12월