구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산촌소득담당 (담당자 최지원, 6932)
	2-3
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 6월 기준)		완료	2024년 7월
			목표달성여부	여

산림신품종 재배단지 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 6. ~ 2024. 7.

❍ 위       치: 산청군 단성면 길리 산98-11번지 일원

❍ 총 소요예산: 금2,500백만원(국비)

※ 시행처: 산림청 국립산림품종관리센터(시범사업)

❍ 사 업 내 용: 재배단지 조성, 관리 및 작업시설 건축

□ 주요 추진사항

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 용역	: 2022. 6월

❍ 사회적협동조합 설립준비위원회 개최	: 2022. 7. ~ 9월

❍ 산청틔움사회적협동조합 창립	: 2022. 10월

❍ 산림신품종재배단지 공사 착공	: 2023. 5월

❍ 신품종재배단지 조성사업 준공(입구 도로공사 포함)	: 2024. 7월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,500	-	300	2,200	-	-	-	-
국비	2,500	-	300	2,200	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액: 사업완료

□ 향후 추진계획: 사업완료

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산촌소득담당 (담당자 최지원, 6932)
	2-3
추진실적 (기준일)	100%(완료) (2025. 1월 기준)		완료예상	2024년 7월
			목표달성여부	완료

산림신품종 재배단지 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 6. ~ 2024. 7.

❍ 위       치: 산청군 단성면 길리 산98-11번지 일원

❍ 총 소요예산: 금2,500백만원(국비)

※ 시행처: 산림청 국립산림품종관리센터(시범사업)

❍ 사 업 내 용: 재배단지 조성, 관리 및 작업시설 건축

□ 주요 추진사항

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 용역	: 2022. 6월

❍ 사회적협동조합 설립준비위원회 개최	: 2022. 7. ~ 9월

❍ 산청틔움사회적협동조합 창립	: 2022. 10월

❍ 산림신품종재배단지 공사 착공	: 2023. 5월

❍ 신품종재배단지 조성사업 준공(입구 도로공사 포함)	: 2024. 7월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,500	-	300	2,200	-	-	-	-
국비	2,500	-	300	2,200	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액 : 사업완료

□ 향후 추진계획 : 사업완료

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산촌소득담당 (주태환, 6931)
	2-3
추진실적 (기준일)	90%(정상추진 ) (2024. 6월 기준)		완료예상	2024년 7월
			목표달성여부	여

산림신품종 재배단지 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 6. ~ 2024. 7.

❍ 위       치: 산청군 단성면 길리 산98-11번지 일원

❍ 총 소요예산: 금2,500백만원(국비)

※ 시행처: 산림청 국립산림품종관리센터(시범사업)

❍ 사 업 내 용: 재배단지 조성, 관리 및 작업시설 건축

□ 주요 추진사항

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 용역                : 2022. 6월

❍ 사회적협동조합 설립준비위원회 개최              : 2022. 7. ~ 9월

❍ 산청틔움사회적협동조합 창립                     : 2022. 10월

❍ 산림신품종재배단지 공사 착공                    : 2023. 5월

❍ 신품종재배단지 조성사업 준공                    : 2024. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,500	-	300	2,200	-	-	-	-
국비	2,500	-	300	2,200	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액: 산림청 국립산림품종관리센터 추진사업

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 신품종재배단지 입구 도로 확포장 공사          : 2023. 5. ~ 2024. 7월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산촌소득담당 (주태환, 6931)
	2-3
추진실적	70% (정상추진 )		완료예상	2024년 7월
			목표달성여부	여

산림신품종 재배단지 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 6. ~ 2024. 7.

❍ 위       치: 산청군 단성면 길리 산98-1번지 일원

❍ 총 소요예산: 금2,500백만원(국비)

※ 시행처: 산림청 국립산림품종관리센터(시범사업)

❍ 사 업 내 용: 재배단지 조성, 관리 및 작업시설 건축

□ 주요 추진사항

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 용역                : 2022. 6월

❍ 사회적협동조합 설립준비위원회 개최              : 2022. 7. ~ 9월

❍ 산청틔움사회적협동조합 창립                     : 2022. 10월

❍ 산림신품종재배단지 공사 착공                    : 2023. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-	-	2,500	2,500	-	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,500	-	300	2,200	-	-	-	-
국비	2,500	-	300	2,200	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액: 산림청 국립산림품종관리센터 추진사업

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 신품종재배단지 입구 도로 확포장 공사          : 2023.  5. ~ 2024. 4월

❍ 신품종재배단지 조성사업 준공                  : 2024. 7월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 산촌소득담당 (담당자 김경한)
	2-3
추진실적	40% (정상추진)		완료예상	2023월 12월
			목표달성여부	여

산림 신품종 재배단지 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.

❍ 위    치 : 산청군 단성면 길리 산98-1번지 일원

❍ 소요예산 : 2,500백만원(국비 100% 사업으로 확보 완료)

❍ 사업내용

- 재배단지 조성(포지, 온실 등)

- 관리시설 1동, 기반시설 등

□ 추진사항

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 용역                      : 2022. 6월

❍ 사회적협동조합 설립준비위원회 개최                    : 2022. 7. ~ 9월

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 중간용역 보고             : 2022. 9월

❍ 산청틔움사회적협동조합 창립                           : 2022. 10월

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 최종 보고                 : 2022. 12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	2,500	2,500
국비	2,500	2,500
도비
군비
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사업대상지 입구 도로 확포장공사 보상지연에 따른 사업 지연 우려

❍ 토지소유자와 관련 마을 이장 방문 및 사업 내용 설명을 통한 사업동의 적극 유도

□ 향후 추진계획

❍ 신품종재배단지 조성사업 공사 시행                    : 2023. 2. ~ 10월

❍ 신품종재배단지 관리 및 운영                          : 2023. 11월