구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농식품유통과 먹거리담당 (담당자 강지훈, 7712)
	2-16
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 6월 기준)		완료	2024년 9월
			목표달성여부	여

산청군 먹거리통합지원센터 건립

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023. 2월 ~ 2024. 12월

❍ 위       치: 경남 산청군 산청읍 병정리 326-6 일원

❍ 총 소요예산: 3,000백만원(도비 1,950, 군비 1,050)

❍ 사 업 내 용: 먹거리통합지원센터 건립 1식(선별 및 포장실, 피킹장, 냉장실 등)

□ 주요 추진사항

❍ 산청군 푸드플랜 및 먹거리통합지원센터 건립 계획 수립	: 2022.  3월

❍ 먹거리통합지원센터 공유재산 관리계획 수립	: 2022.  8월

❍ 지방재정투자심사 완료	: 2022.  8월

❍ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역	: 2022. 10월 ~ 2023.  2월

❍ 먹거리통합지원센터 실시설계 용역	: 2023.  7월 ~ 2023. 10월

❍ 먹거리통합지원센터 시공업체 선정 및 착공	: 2023. 12월 ~

❍ 먹거리통합지원센터 준공	: 2024.  9월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,000	3,000	3,000	3,000	-	1,950	1,050	-	3,000	-	1,950	1,050	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,950	-	-	1,950	-	-	-	-
군비	1,050	-	-	1,050	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
먹거리통합지원센터 건립	합계	3,000	2,804	-	-	3,000	105	-	2,635	-	63
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,950	1,823	-	-	1,950	87	-	1,736	-	-
	군비	1,050	981	-	-	1,050	18	-	900	-	63
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 먹거리통합지원센터 시범운영(5개 학교)                : 2025. 3월 ~ 8월

❍ 먹거리통합지원센터 정상운영(25개 학교)               : 2025. 9월 ~

※ 공약⦁시책별 입법 현황(공약)

❍ 조례명: 산청군 먹거리 보장 기본 조례

발의(조례규칙심의회 등)	위원회 심사	본회의 의결	비고
2023. 10. 23.	2023. 11. 9.	23. 11. 10.	산청군 먹거리 보장 기본 조례 (제정 2023.11.30. 조례 제2716호)

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농식품유통과 먹거리담당 (담당자 김미혜, 7712)
	2-16
추진실적 (기준일)	100%(완료) (2025. 1월 기준)		완료	2024년 9월
			목표달성여부	여

산청군 먹거리통합지원센터 건립

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023. 2월 ~ 2024. 12월

❍ 위       치: 경남 산청군 산청읍 병정리 326-6 일원

❍ 총 소요예산: 3,000백만원(도비 1,950, 군비 1,050)

❍ 사 업 내 용: 먹거리통합지원센터 건립 1식(선별 및 포장실, 피킹장, 냉장실 등)

□ 주요 추진사항

❍ 산청군 푸드플랜 및 먹거리통합지원센터 건립 계획 수립	: 2022.  3월

❍ 먹거리통합지원센터 공유재산 관리계획 수립	: 2022.  8월

❍ 지방재정투자심사 완료	: 2022.  8월

❍ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역	: 2022. 10월 ~ 2023.  2월

❍ 먹거리통합지원센터 실시설계 용역	: 2023.  7월 ~ 2023. 10월

❍ 먹거리통합지원센터 시공업체 선정 및 착공	: 2023. 12월 ~

❍ 먹거리통합지원센터 준공	: 2024.  9월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,000	3,000	3,000	3,000	-	1,950	1,050	-	3,000	-	1,950	1,050	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,950	-	-	1,950	-	-	-	-
군비	1,050	-	-	1,050	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
먹거리통합지원센터 건립	합계	3,000	2,804	-	-	3,000	105	-	2,636	-	63
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,950	1,823	-	-	1,950	87	-	1,736	-	-
	군비	1,050	981	-	-	1,050	18	-	900	-	63
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 먹거리통합지원센터 시범운영(5개 학교)                : 2025. 3월 ~ 8월

❍ 먹거리통합지원센터 정상운영(25개 학교)               : 2025. 9월 ~

※ 공약⦁시책별 입법 현황(공약)

❍ 조례명: 산청군 먹거리 보장 기본 조례

발의(조례규칙심의회 등)	위원회 심사	본회의 의결	비고
2023. 10. 23.	2023. 11. 9.	23. 11. 10.	산청군 먹거리 보장 기본 조례 (제정 2023.11.30. 조례 제2716호)

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농식품유통과 먹거리담당 (담당자 김미혜, 7712)
	2-16
추진실적 (기준일)	50%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

산청군 먹거리통합지원센터 건립

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023. 2월 ~ 2024. 12월

❍ 위       치: 경남 산청군 산청읍 병정리 326-6 일원

❍ 총 소요예산: 3,000백만원(도비 1,950, 군비 1,050)

❍ 사 업 내 용: 먹거리통합지원센터 건립 1식(선별 및 포장실, 피킹장, 냉장실 등)

□ 주요 추진사항

❍ 산청군 푸드플랜 및 먹거리통합지원센터 건립 계획 수립 : 2022. 3월

❍ 먹거리통합지원센터 공유재산 관리계획 수립         : 2022. 8월

❍ 지방재정투자심사 완료                             : 2022. 8월

❍ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역                 : 2022. 10월 ~ 2023. 2월

❍ 먹거리통합지원센터 실시설계 용역                  : 2023.  7월 ~ 2023. 10월

❍ 먹거리통합지원센터 시공업체 선정 및 착공          : 2023. 12월 ~

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,000	3,000	3,000	3,000	-	1,950	1,050	-	3,000	-	1,950	1,050	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,300	-	-	1,300	-	-	-	-
군비	1,700	-	-	1,700	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
먹거리통합지원센터 건립	합계	3,000	778	-	-	3,000	105	-	673
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,950	546	-	-	1,950	87	-	459
	군비	1,050	232	-	-	1,050	18	-	214
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 먹거리생산자회 구성 및 출하약정 체결                : 2024. 7월 ~ 8월

❍ 먹거리통합지원센터 건립(준공)                        : 2024. 9월

❍ 먹거리통합지원센터 시범운영(5개 학교)                : 2025. 3월 ~ 8월

❍ 먹거리통합지원센터 정상운영(25개 학교)               : 2025. 9월 ~

※ 공약⦁시책별 입법 현황(공약)

❍ 조례명: 산청군 먹거리 보장 기본 조례

발의(조례규칙심의회 등)	위원회 심사	본회의 의결	비고
2023. 10. 23.	2023. 11. 9.	23. 11. 10.	산청군 먹거리 보장 기본 조례 (제정 2023.11.30. 조례 제2716호)

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농식품유통과 먹거리담당 (담당자 김미혜, 7712)
	2-16
추진실적	40% (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

산청군 먹거리통합지원센터 건립

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간 : 2023. 2월 ~ 2024. 12월

❍ 위       치: 경남 산청군 산청읍 병정리 326-6 일원

❍ 총 소요예산: 3,000백만원(도비 1,950, 군비 1,050)

❍ 사 업 내 용: 먹거리통합지원센터 건립 1식(선별 및 포장실, 피킹장, 냉장실 등)

□ 주요 추진사항

❍ 산청군 푸드플랜 및 먹거리통합지원센터 건립 계획 수립 : 2022. 3월

❍ 먹거리통합지원센터 공유재산 관리계획 수립      : 2022.  8월

❍ 지방재정투자심사 완료                          : 2022.  8월

❍ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역              : 2022. 10. ~ 2023.  2월

❍ 먹거리통합지원센터 실시설계 용역               : 2023.  7. ~ 2023. 10월

❍ 먹거리통합지원센터 시공업체 선정 및 착공       : 2023. 12월 ~

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,000	3,000	3,000	3,000	-	1,950	1,050	-	3,000	-	1,950	1,050	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,300	-	-	1,300	-	-	-	-
군비	1,700	-	-	1,700	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
먹거리통합지원센터 건립	합계	3,000	105	-	-	3,000	105	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,950	87	-	-	1,950	87	-	-
	군비	1,050	18	-	-	1,050	18	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 농산물 기획생산자 모집 및 교육               : 2024. 2월 ~ 4월

❍ 먹거리생산자회 구성 및 출하약정 체결         : 2024. 6월 ~ 7월

❍ 먹거리통합지원센터 건립(준공)                 : 2024. 9월

❍ 먹거리통합지원센터 시범운영(5개 학교)         : 2025. 3월 ~ 7월

❍ 먹거리통합지원센터 정상운영(25개 학교)        : 2025. 9월 ~

※ 공약⦁시책별 입법 현황(공약)

❍ 조례명: 산청군 먹거리 보장 기본 조례

발의(조례규칙심의회 등)	위원회 심사	본회의 의결	비고
2023. 10. 23.	2023. 11. 9.	23. 11. 10.	산청군 먹거리 보장 기본 조례 (제정 2023.11.30. 조례 제2716호)

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농식품유통과 먹거리담당 (담당자 조은걸)
	2-16
추진실적	20% (정상추진)		완료예상	2023년 12월
			목표달성여부	여

먹거리 통합지원센터 건립

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12월

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 병정리 326-6번지

❍ 소요예산 : 3,000백만원(도비 1,950, 군비 1,050)

❍ 사업내용 : 먹거리통합지원센터 건립(선별포장장, 물류피킹장, 전처리장 등)

□ 추진사항

❍ 산청군 푸드플랜 수립연구용역 실시                       : 2021. 2. ~ 9월

❍ 산청군 푸드플랜 및 먹거리통합지원센터 건립 계획 수립    : 2022. 3월

❍ 먹거리통합지원센터 공유재산 관리계획 수립               : 2022. 6월

❍ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역                 : 2022. 10. ~ 2023. 2월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	3,000		3,000
국비
도비	1,950		1,950
군비	1,050		1,050
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 일반농가의 학교급식 식재료 납품기준 충족애로(규격, 포장 등)로 인한 참여도 저조

❍ 생산자 조직 단계부터 지속적인 교육, 견학 등 실시

□ 향후 추진계획

❍ 먹거리통합지원센터 실시설계                          : 2023. 2. ~ 4월

❍ 먹거리통합지원센터 건립                              : 2023. 5. ~ 12월

❍ 생산자 조직화 구성                                    : 2023. 8. ~ 11월