구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 체육행정담당 (담당자 전이탁, 6422) 문화체육과 체육시설담당 (담당자 서승현, 6433)
	3-4
추진실적 (기준일)	70% (정상추진) (2025. 6월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

공공체육시설 확충

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 7. ~ 2026. 12월

❍ 위       치: 관내일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면, 신등면)

❍ 총 소요예산: 17,740백만원(도비 200 군비 4,740 지방소멸대응기금 12,800)

※ 예산확보방안: 지방전환 사업신청(도비) 및 자체예산 확보

❍ 사 업 내 용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면, 신등면 파크골프장 조성 등

□ 주요 추진사항

❍ 생초 축구센터 건립사업

- 생초 중⦁고교 활용방안 수립 용역 시행                    : 2023.  5월

- 공유재산 관리계획 승인                                   : 2023.  5월

- 생초중학교(토지 및 지장물) 매입                           : 2024.  5월

- 생초중고등학교 철거 설계용역                             : 2024.  7월

- 생초중고등학교 철거 시행                                 : 2025.  6월

❍ 단성면 파크골프장 조성사업 준공                           : 2023.  5월

❍ 오부면 파크골프장 조성사업 준공                           : 2023.  6월

❍ 신등면 파크골프장 조성사업 준공                           : 2024.  4월

❍ 산청읍 파크골프장 조성사업 준공                           : 2024.  5월

❍ 삼장 여울공원 파크골프장 조성사업 준공                    : 2024. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
8,280	17,740	17,240	6,240	-	200	5,440	600	6,240	-	200	5,440	600

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	17,740	-	540	1,100	3,600	6,000	6,000	500
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	200	-	-	200	-	-	-	-
군비	4,740	-	540	900	3,000	-	-	300
기타	12,800	-	-	-	600	6,000	6,000	200

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
공공 체육시설 확충	합계	12,240	5,001	540	435	1,100	785	4,600	3,779	6,000	2
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	200	132	-	-	200	48	-	84	-	-
	군비	5,440	4,832	540	435	900	737	4,000	3,660	-	-
	기타	6,600	37	-	-	-	-	600	35	6,000	2

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 생초면 공공파크골프장 조성

- 공유재산 관리계획 심의 및 승인                   : 2025. 7월

- 지방재정투자사업 심사(군 자체심사)                : 2025. 7월

- 2026년도 지방전환사업 신청                       : 2025. 7월

- 공사 착공 및 준공                                : 2026. 3. ~ 10월

❍ 생초 축구센터 건립사업

- 산청군 관리계획(어서지구지구단위계획) 결정(변경)   : 2025. 7월

- 실시설계 용역 시행	: 2025. 8월

- 공사 착공 및 준공	: 2026. 1. ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 체육행정담당 (담당자 전이탁, 6422) 문화체육과 체육시설담당 (담당자 서승현, 6433)
	3-4
추진실적 (기준일)	70%(정상추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

공공체육시설 확충

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 7. ~ 2026. 12월

❍ 위       치: 관내일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면, 신등면)

❍ 총 소요예산: 17,740백만원(도비 200 군비 4,740 지방소멸대응기금 12,800)

※ 예산확보방안: 지방전환 사업신청(도비) 및 자체예산 확보

❍ 사 업 내 용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면, 신등면 파크골프장 조성 등

□ 주요 추진사항

❍ 생초 축구센터 건립사업

- 생초 중⦁고교 활용방안 수립 용역 시행                    : 2023.  5월

- 공유재산 관리계획 승인                                   : 2023.  5월

- 생초중학교(토지 및 지장물) 매입                           : 2024.  5월

- 생초중고등학교 철거 설계용역                             : 2024.  7월

❍ 단성면 파크골프장 조성사업 준공                           : 2023.  5월

❍ 오부면 파크골프장 조성사업 준공                           : 2023.  6월

❍ 신등면 파크골프장 조성사업 준공                           : 2024.  4월

❍ 산청읍 파크골프장 조성사업 준공                           : 2024.  5월

❍ 삼장 여울공원 파크골프장 조성사업 준공                    : 2024. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	기타 (대)	확보 총계	국비	도비	군비	기타 (대)
8,280	17,740	17,240	12,240	-	200	5,440	6,600	12,240	-	200	5,440	6,600

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	17,740	-	540	1,100	3,600	6,000	6,000	500
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	200	-	-	200	-	-	-	-
군비	4,740	-	540	900	3,000	-	-	300
기타(대)	12,800	-	-	-	600	6,000	6,000	200

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
공공체육시설 확충	합계	12,240	4,999	540	435	1,100	785	4,600	3,779	6,000	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	200	132	-	-	200	48	-	84	-	-
	군비	5,440	4,832	540	435	900	737	4,000	3,660	-	-
	기타	6,600	35	-	-	-	-	600	35	6,000	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 생초면 공공파크골프장 조성

- 하천점용허가 협의                                    : 2025. 1. ~ 3월

- 공사 착공 및 준공                                    : 2025. 3. ~ 12월

❍ 생초 축구센터 건립사업

- 산청군 관리계획(어서지구지구단위계획) 결정(변경)       : 2025. 2월

- 생초중⦁고등학교 철거 시행                           : 2025. 2월

- 실시설계 용역 시행                                   : 2025. 7월

- 공사 착공 및 준공                                    : 2026. 1. ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 서승현, 6433)
	3-4
추진실적 (기준일)	60%(정상추진) (2024. 8. 28. 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

공공체육시설 확충(변경)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 7. ~ 2026. 12월

❍ 위       치: 관내 일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 등)

❍ 총 소요예산: 17,740백만원(도비 200, 군비 17,540)

❍ 사 업 내 용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 파크골프장 조성 등

□ 주요 추진사항

ㅇ 생초면 공공파크골프장 조성사업

- 실시설계 및 환경영향평가 용역 시행 및 중단	: 2022. 8.~ 10월

- 낙동강유역환경청 하천 지구변경 요청(복원→친수지구)	: 2022. 9월

- 낙동강유역환경청 하천 지구변경 협의	: 2024. 6월

- 실시설계 및 환경영향평가 용역 중단 해제	: 2024. 7월

ㅇ 생초 축구센터 건립사업

- 생초 중·고교 활용방안 수립 용역 시행	: 2023. 5월

- 공유재산 관리계획 승인	: 2023. 9월

- 경상남도의회 생초중학교 매각 공유재산 관리계획 승인   : 2024. 4월

- 건축기획 용역 시행	: 2024. 4월

- 산청군관리계획(어서지구지구단위계획) 결정 용역 시행	: 2024. 5월

- 생초중학교(토지 및 지장물) 매입	: 2024. 5월

- 생초중고등학교 철거 설계 용역 완료	: 2024. 7월

ㅇ 단성면 파크골프장 조성사업 준공	: 2023. 5월

ㅇ 오부면 파크골프장 조성사업 준공	: 2023. 6월

ㅇ 신등면 파크골프장 조성사업 준공	: 2024. 4월

ㅇ 산청읍 파크골프장 조성사업 준공	: 2024. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
8,280	17,740	17,240	5,240	-	200	5,040	-	5,240	-	200	5,040	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액			임기 내 투자 계획			임기 후
		21년 까지	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	17,740	-	540	1,100	3,600	6,000	6,000	500
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	200	-	-	200	-	-	-	-
군비	4,740	-	540	900	3,000	-	-	300
기타(대)	12,800	-	-	-	600	6,000	6,000	200

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
공공체육시설 확충	합계	5,240	3,894	540	435	1,100	785	3,600	2,674
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	200	117	-	-	200	48	-	69
	군비	5,040	3,777	540	435	900	737	3,600	2,605
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

ㅇ (생초면 공공파크골프장) 낙동강유역환경청의 하천기본계획 변경(복원지구 ⇒ 친수지구) 수립 중으로 이로 인한 사전행정절차 지연

→ 낙동강유역환경청과 유기적 협의로 행정절차 조기 이행

ㅇ (생초 축구센터)

- 경상남도산청교육지원청에서 생초중학교 매각을 위해 2024. 2월 경상남도교육감에게 제출한 공유재산 관리계획(안)이 제412회 경상남도의회 임시회 제2차 본회의(2024. 4. 25.)에서 결정됨에 따라 우리 군에서는 생초중학교를 2024. 5월(당초 계획 2023. 7월) 취득으로 인하여 행정절차가 지연됨

□ 향후 추진계획

ㅇ 생초면 공공파크골프장 조성

- 조사측량 및 실시설계용역	: 2024.  8. ~ 10월

- 환경영향평가(변경협의) 용역	: 2024.  8. ~ 10월

- 남강하천기본계획(변경)고시	: 2024. 하반기

- 하천점용허가 협의	: 2025.  1. ~ 3월

- 공사 착공 및 준공	: 2025.  3. ~ 12월

ㅇ 생초 축구센터 건립사업

- 생초 축구센터 건립사업 건축기획(변경) 수립	: 2024. 11월

- 산청군관리계획(어서지구지구단위계획) 결정(변경)	: 2025.  2월

- 생초중·고등학교 철거 시행	: 2025.  2월

- 설계발주	: 2025.  3월

- 공사 준공	: 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 서승현, 6433)
	3-4
추진실적 (기준일)	60%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

공공체육시설 확충

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 7. ~ 2026. 12월

- 변    경: 2022. 7. ~ 2024. 12월

- 변경사유: 사전 행정절차 진행 및 편입부지 보상 협의 지연으로 변경

❍ 위       치: 관내 일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 등)

❍ 총 소요예산: 8,280백만원(도비 2,160, 군비 6,120)

※ 예산확보방안: 지방전환 사업신청(도비) 및 자체예산 확보

❍ 사 업 내 용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 파크골프장 조성 등

□ 주요 추진사항

❍ 생초 축구센터 건립사업

- 생초 중·고교 활용방안 수립 용역 시행	: 2023. 5월

- 공유재산 관리계획 승인	: 2023. 5월

- 생초중학교(토지 및 지장물) 매입	: 2024. 5월

❍ 단성면 파크골프장 조성사업 준공	: 2023. 5월

❍ 오부면 파크골프장 조성사업 준공	: 2023. 6월

❍ 신등면 파크골프장 조성사업 준공	: 2024. 4월

❍ 산청읍 파크골프장 조성사업 준공	: 2024. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
8,280	8,280	8,280	5,240	600	200	4,440	-	5,240	600	200	4,440	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	8,280	-	580	4,700	3,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,160	-	-	960	1,200	-	-	-
군비	6,120	-	580	3,740	1,800	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
공공체육시설 확충	합계	5,240	3,861	540	435	1,100	785	3,600	2,641
	국비	600	-	-	-	-	-	600	-
	도비	200	117	-	-	200	48	-	69
	군비	4,440	3,744	540	435	900	737	3,000	2,572
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ (생초면 공공파크골프장) 하천기본계획 변경 수립 중(낙동강유역환경청)

→ 낙동강유역환경청과 유기적 협의로 행정절차 조기 이행

□ 향후 추진계획

❍ 생초면 공공파크골프장 조성

- 남강하천기본계획(변경)고시	: 2024. 6월

- 2025년 지방전환사업 예산 신청	: 2024. 8월

- 공사 착공 및 준공	: 2025. 1. ~ 12월

❍ 생초 축구센터 건립사업

- 사업계획서 사전검토 및 심의	: 2024. 7월

- 생초중·고등학교 철거	: 2024. 9월

- 설계발주	: 2024. 11월

- 공사 착공 및 준공	: 2025. 6. ~ 2026. 10월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 서승현, 6433)
	3-4
추진실적	40% (정상추진)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

공공체육시설 확충

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 7. ~ 2024. 12월

- 변    경: 2022. 7. ~ 2026. 12월

- 변경사유: 사전 행정절차 진행 및 편입부지 보상 협의 지연으로 변경

❍ 위       치: 관내 일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 등)

❍ 총 소요예산: 8,280백만원(도비 2,160, 군비 6,120)

* 예산확보방안: 지방전환 사업신청(도비) 및 자체예산 확보

❍ 사 업 내 용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 파크골프장 조성 등

□ 주요 추진사항

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 생초 중·고교 활용방안 수립 용역 시행	: 2023. 5월

- 공유재산 관리계획 승인	: 2023. 5월

❍ 단성면 파크골프장 조성사업 준공	: 2023. 5월

❍ 산청읍 파크골프장 조성사업 준공(1차분)	: 2023. 6월

❍ 오부면 파크골프장 조성사업 준공	: 2023. 6월

❍ 신등면 파크골프장 조성사업 준공                            : 2023.12월

❍ 산청읍 파크골프장 조성사업(잔여분) 조사측량 및 실시설계용역	: 2024. 1월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
8,280	8,280	8,280	5,000	400	200	4,400	-	5,000	400	200	4,400	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	8,280	-	580	4,700	3,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,160	-	-	960	1,200	-	-	-
군비	6,120	-	580	3,740	1,800	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
공공체육시설 확충	합계	5,000	1,216	500	435	1,100	781	3,400	-
	국비	400	-	-	-	-	-	400	-
	도비	200	46	-	-	200	46	-	-
	군비	4,400	1,170	500	435	900	735	3,000	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ (생초면 공공파크골프장) 하천기본계획 변경 등 행정절차 지연

→ 하천관리청과 유기적 협의로 행정절차 조기 이행

□ 향후 추진계획

❍ 산청읍 파크골프장 조성

- 공사 착공 및 준공(잔여분)	: 2024. 3. ~ 5월

❍ 생초면 공공파크골프장 조성

- 남강하천기본계획(변경)고시	: 2024. 6월

- 2025년 지방전환사업 예산 신청	: 2024. 8월

- 공사 착공 및 준공	: 2025. 1. ~ 12월

❍ 생초 축구센터 건립사업

- 공공용 건물 설계공모 실시	: 2024. 6. ~ 10월

- 생초중학교 매입	: 2024. 7월

- 기본계획 및 실시설계	: 2024. 10. ~ 2025. 2월

- 생초중학교 철거	: 2024. 11월

- 공사 착공 및 준공	: 2025. 5. ~ 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 김진구)
	3-4
추진실적	10% (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

공공체육시설 확충

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 7. ~ 2024. 12월

❍ 위    치: 관내 일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 등)

❍ 소요예산: 8,280백만원(도비 2,160, 군비 6,120)

❍ 사업내용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 파크골프장 조성 등

□ 추진사항

❍ 산청군 공공파크골프장 조성

- 실시설계용역 및 소규모환경영향평가용역 시행   : 2022. 8. ~ 2023. 6월

❍ 오부면 파크골프장 조성

- 실시설계용역                                  : 2022. 6. ~ 12월

❍ 단성면 파크골프장 조성

- 실시설계용역                                  : 2022. 2. ~  6월

- 공사(조경공사) 착공 및 준공                    : 2022. 5. ~ 11월

- 공사(토목공사) 착공                            : 2022. 10. ~ 2023. 3월

□ 연차별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	8,280	580	4,700	3,000
국비
도비	2,160		960	1,200
군비	6,120	580	3,740	1,800
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 최소 6,000㎡ 이상의 토지가 확보되어야 9홀 파크골프장 조성이 가능하나, 현재 군유지에 설치 가능한 곳이 많지 않음

⇒ 기존 체육시설 및 하천변 공원 등을 활용한 대체 조성 검토

❍ 생초중학교 매입비용 약20억원, 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성비용 약 30억원 등 총50억원의 예산이 필요

⇒ 매입비용은 자체예산으로 확보하고, 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성비

용은 지방전환사업 등 국·도비 보조 사업 신청으로 예산 확보

□ 향후 추진계획

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 생초중고 활용방안 수립 용역                     : 2023. 2. ~ 6월

- 생초중학교 매입                                 : 2024. 3월

- 기본계획 및 실시설계용역                        : 2024. 5. ~ 6월

- 공사착공 및 준공                                : 2024. 7. ~ 12월

❍ 산청군 공공파크골프장 조성

- 하천점용허가 및 소규모환경영향평가 협의         : 2023. 12. ~ 2024. 3월

- 공사 착공 및 준공                               : 2024. 3. ~  12월

❍ 산청읍 파크골프장 조성

- 실시설계용역                                    : 2023. 1. ~  5월

- 공사 착공 및 준공                               : 2023. 6. ~ 11월

❍ 오부면 파크골프장 조성

- 공사 착공 및 준공                               : 2023. 3. ~  6월