구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김유준, 7211)
	4-6
추진실적 (기준일)	100% (완료) (2025. 6월 기준)		완료	2024년 12월
			목표달성여부	여

황매산 관광객 편의안전시설 조성사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2024년

❍ 위       치: 차황면 법평리 지내

❍ 총 소요예산: 3,190백만원(균특 3,190)

❍ 사 업 내 용: 황매산 관광객 편의안전시설 조성

- 보도육교 설치(L=160m, B=3m), 보도육교 연결전망대 설치 2개소

- 연결데크로드 L=175m

□ 주요 추진사항

❍ 지역개발계획 변경 수요 조사서 제출	: 2021.  5월

❍ 지역개발계획 변경 관련 현장확인(국토부,경남도 등)	: 2021.  9월

❍ 관계기관 협의 및 관련법 검토 등	: 2021. 10 ~  12월

❍ 지역개발계획 변경 승인	: 2021. 12월

❍ 실시설계 및 인허가 협의	: 2022.  1 ~ 12월

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 착공	: 2023.  1월

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 준공	: 2024. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,190	3,190	2,716	3,190	3,190	-	-	-	2,716	2,716	-	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	3,190	474	-	2,716	-	-	-	-
국비	3,190	474	-	2,716	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
황매산 관광객 편의 안전시설 조성사업	합계	2,716	2,905	740	624	1,976	2,281	-	-
	국비	2,716	2,905	740	624	1,976	2,281	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 개발담당 (담당자 김유준, 7211)
	4-6
추진실적 (기준일)	100%(완료) (2025. 1월 기준)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

황매산 관광객 편의안전시설 조성사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2024년

❍ 위       치: 차황면 법평리 지내

❍ 총 소요예산: 3,190백만원(균특 3,190)

❍ 사 업 내 용: 황매산 관광객 편의안전시설 조성

- 보도육교 설치(L=160m, B=3m), 보도육교 연결전망대 설치 2개소

- 연결데크로드 L=175m

□ 주요 추진사항

❍ 지역개발계획 변경 수요 조사서 제출	: 2021.  5월

❍ 지역개발계획 변경 관련 현장확인(국토부,경남도 등)	: 2021.  9월

❍ 관계기관 협의 및 관련법 검토 등	: 2021. 10 ~  12월

❍ 지역개발계획 변경 승인	: 2021. 12월

❍ 실시설계 및 인허가 협의	: 2022.  1 ~ 12월

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 착공	: 2023.  1월

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 준공	: 2024. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,190	3,190	2,716	3,190	3,190	-	-	-	2,716	2,716	-	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	3,190	474	-	2,716	-	-	-	-
국비	3,190	474	-	2,716	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
황매산 관광객 편의안전시설 조성사업	소계	2,716	2,905	-	-	740	624	1,976	2,281
	국비	2,716	2,905	-	-	740	624	1,976	2,281
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 부대공사 시행        : 2025.  1월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 개발담당 (담당자 김유준, 7211)
	4-6
추진실적 (기준일)	60%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

황매산 관광객 편의안전시설 조성사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2024년

❍ 위       치: 차황면 법평리 지내

❍ 총 소요예산: 3,190백만원(균특 3,190)

❍ 사 업 내 용: 황매산 관광객 편의안전시설 조성

- 보도육교 설치(L=160m, B=3m), 보도육교 연결전망대 설치 2개소

- 연결데크로드 L=175m

□ 주요 추진사항

❍ 지역개발계획 변경 수요 조사서 제출                 : 2021. 5월

❍ 지역개발계획 변경 관련 현장확인(국토부,경남도 등)   : 2021. 9월

❍ 관계기관 협의 및 관련법 검토 등                    : 2021. 10. ~  12월

❍ 지역개발계획 변경 승인                             : 2021. 12월

❍ 실시설계 및 인허가 협의                            : 2022. 1. ~ 12월

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 착공           : 2023. 1월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,190	3,190	2,716	3,190	3,190	-	-	-	2,716	2,716	-	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	3,190	474	-	2,716	-	-	-	-
국비	3,190	474	-	2,716	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
황매산 관광객 편의안전시설 조성사업	소계	2,716	1,245	-	-	740	624	1,976	621
	국비	2,716	1,245	-	-	740	624	1,976	621
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 준공            : 2024. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 개발담당 (담당자 김유준, 7211)
	4-6
추진실적	40 % (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

황매산 관광객 편의안전시설 조성사업

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022 ~ 2024년

❍ 위    치: 산청군 차황면 법평리 지내

❍ 소요예산: 3,190백만원(균특 3,190)

❍ 사업내용: 황매산 관광객 편의안전시설 구축 1식

- 보도육교 설치 L=161m, B=3m, 보도육교 연결 전망대 2개소 설치

- 연결데크로드 설치 L=175m, B=2.0m

□ 주요 추진사항

❍ 지역개발계획 변경 수요 조사서 제출                 : 2021. 5월

❍ 지역개발계획 변경 관련 현장확인(국토부,경남도 등)   : 2021. 9월

❍ 관계기관 협의 및 관련법 검토 등                    : 2021. 10. ~  12월

❍ 지역개발계획 변경 승인                             : 2021. 12월

❍ 실시설계 및 인허가 협의                            : 2022. 1. ~ 12월

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 착공           : 2023. 1월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,190	3,190	2,716	3,190	3,190	-	-	-	2,716	2,716	-	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	3,190	474	-	2,716	-	-	-	-
국비	3,190	474	-	2,716	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
황매산 관광객 편의안전시설 조성사업	소계	2,716	624	-	-	740	624	1,976	-
	국비	2,716	624	-	-	740	624	1,976	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 준공            : 2024. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 조현형)
	4-6
추진실적	10% (정상추진)		완료예상	2024년
			목표달성여부	여

황매산 관광객 편의안전시설 조성사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 위    치 : 산청군 차황면 법평리 지내

❍ 소요예산 : 3,190백만원(균특 3,190)

❍ 사업내용 : 황매산 관광객 편의안전시설 구축 1식

- 보도육교 설치 L=161m, B=3.0m, 정자(전망대, 그늘쉼터) 설치 1식

- 연결데크로드 설치 L=175m, B=2m

□ 추진사항

❍ 실시설계용역                                      : 2022. 7. ~ 9월

❍ 공사착공                                          : 2022. 12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	3,190	474	740	1,976
국비	3,190	474	740	1,976
도비
군비
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 없음

□ 향후 추진계획

❍ 지역개발사업구역지정                           : 2023. 2. ~ 6월

❍ 정자(전망대, 그늘쉼터) 설치공사 준공            : 2023. 12월

❍ 보도육교설치공사 등 준공                       : 2024. 12월