구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 하수도담당 (담당자 이승준, 7021)
	5-8
추진실적 (기준일)	80%(정상추진) (2025. 6월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

공공하수도 수혜지역 확장

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2020 ~ 2027년

❍ 위       치: 차황면 상법리, 단성면 방목리, 시천면 사리, 생초면 노은리 일원

❍ 총 소요예산: 38,474백만원(국비 26,960백만원, 지방비 11,514백만원)

❍ 사 업 내 용: 하수처리시설 신·증설 및 하수관로 매설, 배수설비 등

□ 주요 추진사항

❍ 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 착공	: 2023.  3월

❍ 시천 공공하수처리시설 증설사업 착공	: 2023.  5월

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업 준공 및 사용개시	: 2023. 10월

❍ 석대지구 공공하수관로 정비사업 착공	: 2024. 10월

❍ 노은지구 농어촌하수도 1,2,3,차수분공사 준공	: 2024. 12월

❍ 석대지구 하수도정비 기본계획 부분변경 완료	: 2025.  1월

❍ 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업(4차분) 착공	: 2025.  2월

❍ 시천 공공하수처리시설 증설사업 준공 및 사용개시	: 2025.  6월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
38,474	38,474	33,015	30,817	20,480	3,518	3,293	3,526	29,359	20,145	3,700	3,655	1,860

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	38,474	5,459	3,455	6,963	7,335	7,466	7,796	-
국비	26,960	2,436	2,815	5,038	5,360	5,490	5,821	-
도비	2,894	518	284	523	523	523	523	-
군비	2,918	839	356	393	393	444	443	-
기타	5,702	1,666	-	1,009	1,009	1,009	1,009	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
공공 하수도 수혜지역 확장	합계	29,359	14,909	3,455	817	5,493	4,257	6,728	6,556	13,683	3,280
	국비	20,145	11,201	2,815	480	3,860	3,640	3,881	5,469	9,589	1,612.3
	도비	3,700	884	284	181	744	213	540	217	2,132	273
	군비	3,655	1,782	356	156	724	404	885	634	1,690	588
	기금	1,860	1,042	-	-	165	-	1,423	236	272	806

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 석대지구 공공하수처리시설 신설사업 공사 착수              : 2025. 12월

❍ 노은지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 준공              : 2025. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 하수도담당 (이승준, 7021)
	5-8
추진실적 (기준일)	70%(정상추진) (2025. 1월 기준)		완료	2026년 12월
			목표달성여부	여

공공하수도 수혜지역 확장

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2020 ~ 2026년

❍ 위       치: 차황면 상법리, 단성면 방목리, 시천면 사리, 생초면 노은리 일원

❍ 총 소요예산: 38,474백만원(국비 26,960백만원, 지방비 11,514백만원)

❍ 사 업 내 용: 하수처리시설 신·증설 및 하수관로 매설, 배수설비 등

□ 주요 추진사항

❍ 석대, 시천, 노은지구 실시설계용역 착수	: 2020. 10월

❍ 석대, 시천지구 하수도정비 기본계획 부분변경 완료	: 2021.  6월

❍ 석대, 시천, 노은지구 실시설계 완료	: 2022. 12월

❍ 시천, 노은지구 하수도 정비사업 발주	: 2023.  5월

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업 준공	: 2023. 10월

❍ 석대지구 하수도정비 기본계획 부분변경 완료	: 2024.  9월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	기타	확보 총계	국비	도비	군비	기타
38,474	38,474	33,015	34,818	22,581	4,217.5	4,493.5	3,526	29,359	20,145	3,699.5	3,654.5	1,860

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	38,474	5,459	3,455	6,963	7,335	7,466	7,796	-
국비	26,960	2,436	2,815	5,038	5,360	5,490	5,821	-
도비	2,894	518	284	523	523	523	523	-
군비	2,918	839	356	393	393	444	443	-
기타 (수질개선특별회계)	5,702	1,666	-	1,009	1,009	1,009	1,009	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
공공하수도 수혜지역 확장	합계	29,359	11,630	3,455	817	5,493	4,257	6,728	6,556	13,683	-
	국비	20,145	9,589	2,815	480	3,860	3,640	3,881	5,469	9,589	-
	도비	3,699.5	611	284	181	744	213	539.5	217	2,132	-
	군비	3,654.5	1,194	356	156	724	404	884.5	634	1,690	-
	기금	1,860	236	0	-	165	-	1,423	236	272	-

□ 문제점 및 대책

❍ 지역주민들의 혐오시설에 대한 갈등으로 공공하수처리시설 부지 협의 애로

▶ 하수처리시설에 대한 이미지 제고 및 주민설명회를 통한 지역주민들의 갈등 완화로 지속적인 소통

□ 향후 추진계획

❍ 석대지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 착수  : 2025. 06월

❍ 시천지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 준공  : 2025. 06월

❍ 시장지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 착수  : 2025. 06월

❍ 저호지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 착수  : 2025. 06월

❍ 노은지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 준공  : 2025. 12월

❍ 입석지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 착수  : 2026. 02월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 하수도담당 (담당자 이승준, 7021)
	5-8
추진실적 (기준일)	65%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

공공하수도 수혜지역 확장

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2020 ∼ 2026년

❍ 위    치: 차황면 상법리, 단성면 방목리, 시천면 사리, 생초면 노은리 일원

❍ 소요예산: 38,474백만원(국비 26,960백만원, 지방비 11,514백만원)

❍ 사업내용: 하수처리시설 신·증설 및 하수관로 매설, 배수설비 등

□ 주요 추진사항

❍ 석대, 시천, 노은지구 실시설계용역 착수                 : 2020. 10월

❍ 석대, 시천지구 하수도정비 기본계획 부분변경 완료      : 2021. 06월

❍ 석대, 시천, 노은지구 실시설계 완료                    : 2022. 12월

❍ 시천, 노은지구 하수도 정비사업 발주                   : 2023. 05월

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업 준공                    : 2023. 10월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
38,474	38,474	33,015	20,799	13,414	1,626	2,000	3,759	14,461	10,604	1,108	1,161	1,588

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	38,474	5,459	3,455	6,963	7,335	7,466	7,796	-
국비	26,960	2,436	2,815	5,038	5,360	5,490	5,821	-
도비	2,894	518	284	523	523	523	523	-
군비	2,918	839	356	393	443	444	443	-
기타 (수질개선특별회계)	5,702	1,666	-	1,009	1,009	1,009	1,009	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
공공하수도 수혜지역 확장	합계	14,461	7,039	3,455	817	5,493	4,257	5,513	1,965
	국비	10,604	5,765	2,815	480	3,860	3,640	3,929	1,645
	도비	1,108	468	284	181	744	213	80	74
	군비	1,161	650	356	156	724	404	81	90
	기금	1,588	156	-	-	165	-	1,423	156

□ 문제점 및 대책

❍ 지역주민들의 혐오시설에 대한 갈등으로 공공하수처리시설 부지 협의 애로

▶ 하수처리시설에 대한 이미지 제고 및 주민설명회를 통한 지역주민들의 갈등        완화로 지속적인 소통

□ 향후 추진계획

❍ 석대지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 착수  : 2025. 01월

❍ 시천지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 준공  : 2025. 05월

❍ 노은지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 준공  : 2025. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 하수도담당 (담당자 이승준, 7021)
	5-8
추진실적	65% (정상추진)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

공공하수도 수혜지역 확장

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2020 ∼ 2026년

❍ 위    치: 차황면 상법리, 단성면 방목리, 시천면 사리, 생초면 노은리 일원

❍ 소요예산: 38,474백만원(국비 26,960백만원, 지방비 11,514백만원)

❍ 사업내용: 하수처리시설 신·증설 및 하수관로 매설, 배수설비 등

□ 주요 추진사항

❍ 석대, 시천, 노은지구 실시설계용역 착수                : 2020. 10월

❍ 석대, 시천지구 하수도정비 기본계획 부분변경 완료      : 2021. 06월

❍ 석대, 시천, 노은지구 실시설계용역 완료                : 2022. 12월

❍ 시천, 노은지구 하수도 정비사업 발주                   : 2023. 05월

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업 준공                    : 2023. 10월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
38,474	38,474	33,015	20,779	13,414	1,626	2,000	3,759	15,340	10,978	1,108	1,161	2,093

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	38,474	5,459	3,455	6,963	7,335	7,466	7,796	-
국비	26,960	2,436	2,815	5,038	5,360	5,490	5,821	-
도비	2,894	518	284	523	523	523	523	-
군비	2,918	839	356	393	443	444	443	-
기타 (수질개선특별회계)	5,702	1,666	-	1,009	1,009	1,009	1,009	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
공공하수도 수혜지역 확장	합계	15,340	5,163	3,455	816	5,493	4,257	6,392	91
	국비	10,978	4,207	2,815	479	3,860	3,640	4,303	88
	도비	1,108	395	284	181	744	213	80	1
	군비	1,161	561	356	156	724	404	81	1
	기금	2,093	-	-	-	165	-	1,928	-

□ 문제점 및 대책

❍ 지역주민들의 혐오시설에 대한 갈등으로 공공하수처리시설 부지 협의 애로

▶ 하수처리시설에 대한 이미지 제고 및 주민설명회를 통한 지역주민들의 갈등        완화로 지속적인 소통

□ 향후 추진계획

❍ 석대지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 착수             : 2024. 10월

❍ 시천지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 완료            : 2024. 12월

❍ 노은지구 공공하수처리시설 증설사업 공사 완료            : 2025. 12월

❍ 석대지구 공공하수처리시설 신설사업 공사 완료              : 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	상하수도과 하수도담당 (담당자 김현철)
	5-8
추진실적	32% (정상추진)		완료예상	2026년
			목표달성여부	여

공공하수도 수혜지역 확장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2026년

❍ 위    치 : 차황면 상법리, 단성면 방목리, 시천면 사리, 생초면 노은리 일원

❍ 소요예산 : 38,475백만원(국비 26,960, 도비 2,894, 군비 2,918, 기금 5,703)

❍ 사업내용 : 하수처리시설 신·증설 및 하수관로 매설, 배수설비 등

□ 추진사항

❍ 하수도정비 기본계획 부분변경 완료                      : 2021.  6월

❍ 석대지구, 시천지구, 노은지구 실시설계용역 완료          : 2022. 10월

❍ 시천지구, 노은지구 공공하수도 증설사업 재원 협의 완료  : 2022. 12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	38,474	8,914	6,963	7,335	7,466	7,796
국비	26,960	5,251	5,038	5,360	5,490	5,821
도비	2,893.5	801.5	523	523	523	523
군비	2,917.7	1,194.7	393	443	444	443
기타	5,702.8	1,666.8	1,009	1,009	1,009	1,009

□ 문제점 및 대책

❍ 선정지구 외 돈사 추가 정비 요구에 따라 농림축산식품부와 협의 후 기본

계획 시 반영토록 노력

□ 향후 추진계획

❍ 기본계획 수립 완료                                      : 2023.  7월

❍ 시행계획 수립 완료                                      : 2024. 12월

❍ 공사 착공                                               : 2025.  3월

❍ 공사 준공                                               : 2026. 12월